SERVIZIO EDILIZIA

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
I.P.S.I.A. "A. FERRARI" DI MARANELLO: PROGETTO ESECUTIVO D¿ADEGUAMENTO SISMICO E D¿AMPLIAMENTO: 2° STRALCIO.APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA 

Con determina dirigenziale n. 38  del  10/01/2007 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all’adeguamento sismico ed ampliamento 2° stralcio dell’IPSIA Ferrari di Maranello (Modena) per un importo complessivo pari  a € 1.250.000,00  così suddiviso:    

A)	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (OG1)			€   803.498,22	
B)	IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)				€   227.010,57	 
C)	ONERI SICUREZZA						€     6.996,94	 
	 		TOTALE LAVORI    				€ 1.037.505,73 
	
SOMME A DISPOSIZIONE	 	 
D)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (2%) 	 			€    20.750,11 	 
E)	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	 	€    47.500,00 	 
F)	IVA SUI LAVORI 10%	 					€   103.750,57 	 
G)	COLLAUDO	 						€    12.500,00 	 
H)	IMPREVISTI	 						€    23.500,00 	 
I)	SPESE PER ALLACCIAMENTI	 				€     4.000,00 	 
L)	SPESE PER AUTORITA'	 					€       400,00 	 
M)	ARROTONDAMENTI	 					€        93,58 	 
 	 	 	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 		€   212.494,27 
 	 	 	 
 			TOTALE	 	 				€ 1.250.000,00

La spesa per l’esecuzione dei lavori è stata prevista nel piano triennale degli investimenti 2005/2007, trova copertura finanziaria all’azione n. 3888 d “IPSIA FERRARI DI MARANELLO – ADEGUAMENTO SISMICO”, del PEG2007.
Con determina dirigenziale n° 509 del 04/06/2007 le opere venivano affidati all’impresa Allodi srl , con sede in Parma (Pr)  Via Argonne, 8bis, Cod. Fisc. E P.Iva 00145330346.
La seguente impresa, per i lavori in oggetto, ha offerto un ribasso percentuale pari al 14,23% e pertanto l’importo contrattuale netto è di € 883.867,39 oltre a € 6.996,94 per oneri di sicurezza, € 89.086,43 per IVA al 10% e, quindi, per l’importo totale complessivo di € 979.950,76.
I lavori sono stati consegnati parzialmente e con riserva il 02/07/2007 come risulta dal verbale prot. 37/2007 del 04/07/2007; solo successivamente, in data 30/08/2007, si è proceduto a consegnare in via definitiva i suddetti lavori, come risulta da relativo verbale, cosicchè l’ultimazione dei lavori debba avvenire entro il 29/08/2008.
In seguito alle operazioni concernenti la realizzazione di alcuni pilastri, per questioni imputabili a problemi di natura geometrica (necessità di mutare le dimensioni e profondità delle fondazioni) e geologiche (variazione della potenza e della profondità del banco di ghiaia con conseguente disassamento di alcuni pilastri), certamente non rilevabili con precisione in sede progettuale, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste in fase progettuale. In conseguenza a ciò ed alla modalità operativa di realizzazione dei nuovi impalcati, che contemplano una diversa sequenza di realizzazione delle strutture principali del nuovo impalcato di copertura, si è reso necessario apportare delle modifiche anche a delle strutture in elevazione, affinchè i lavori che si intendono realizzare non risultino in contrasto con il progetto esecutivo approvato in data 10/01/2007 con determina n. 38. 
Così sono stati previsti i seguenti interventi che consisteranno in :
•	incremento volume degli scavi in fondazione; 
•	disfacimento di alcune tramezze e rimozione serramenti per poter permettere lo spostamento di n° 3 pilastri dissasati (solo quelli interni lungo il corridoio principale); 
•	incremento della profondità di tre gruppi di pali di fondazione (causa brusca variazione profondità del banco di ghiaia sul lato sud-nord) al fine di incrementarne la portanza in fondazione;
•	incremento dei quantitativi di armatura di  alcune travi e pilastri a causa dei disassamenti;
•	incremento dei quantitativi di calcestruzzo strutturale per le maggiori dimensioni delle nuove travi e nodi strutturali;
•	incremento delle relative casseformi;
•	realizzazione di nuove travi di collegamento (trave reticolare di copertura) aggiunte solo al fine di irrigidimento dopo il disassamento dei pilastri.
 
Sentiti il Responsabile del Procedimento ed i progettisti, il Direttore dei Lavori, nonché coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, ha provveduto a disporre la redazione di una perizia di variante finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 1 e comma 3  della legge 163/06 e successive modifiche ed integrazioni per un importo netto di  €934.450,13 di cui € 6.696,94  per oneri per la sicurezza con un aumento complessivo pari a  €43.585,80.
L’impresa Allodi srl , con sede in Parma (Pr)  Via Argonne, 8bis, Cod. Fisc. e P.Iva 00145330346, esecutrice dei lavori principali, interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale per un importo netto di €934.450,13 di cui € 927.753,19  per lavori ed €6.696,94  per oneri per la sicurezza con un aumento complessivo pari a  €43.585,80 pari a circa il 4,89 % dell’importo offerto, dunque inferiore al 5% dell’importo contrattuale così come previsto all’art. 132 comma 3 della legge 163/06.
Dato atto che quanto sopra descritto modifica il nuovo quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO 2° STRALCIO (a seguito di perizia)
A)	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (OG1)			€   732,746.22	
B)	IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)				€   194,706.97	 
C)	ONERI SICUREZZA						€     6.996,94	 
	 	TOTALE LAVORI    					€   934.450,13  
	
SOMME A DISPOSIZIONE	 	 
D)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (2%) 	 			€    21.621,83 	 
E)	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	 	€    42.500,00 	 
F)	IVA SUI LAVORI 10%	 					€    93.445,01 	 
G)	COLLAUDO	 						€     7.000,00 	 
H)	IMPREVISTI	 						€         0,00 	 
I)	SPESE PER ALLACCIAMENTI	 				€     4.000,00 	 
L)	SPESE PER AUTORITA'	 					€       400,00 	 
M)	ARROTONDAMENTI	 					€         0,00
SOMME ULTERIORI PER RIBASSO D’asta, IVA, DL 
E COLLAUDO 								€   146,583.02 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€   315.549,87
 	 	 	 
 			TOTALE	 	 				€ 1.250.000,00

Il responsabile del procedimento è l’Ing.  Alessandro Manni  Direttore d’Area dei Lavori Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1)	di approvare la perizia di variante e suppletiva per le motivazioni in premessa indicate redatta dal direttore dei lavori in data 26/05/2008 ai sensi dell’art. 132 della L. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ed il nuovo quadro economico dei lavori  come in premessa suddiviso;
2)	di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione sono acquisiti agli atti in data 26/05/2008 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
3)	di affidare l’esecuzione dei nuovi maggiori lavori all’ impresa Allodi srl , con sede in Parma (Pr)  Via Argonne, 8bis, Cod. Fisc. e P.Iva 0014533034, la quale ha offerto di eseguirli agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto d’applato n° 27570 del 23/07/2007, giusto schema di atto di sottomissione firmato dalla Ditta per accettazione;
4)	di dare atto che a seguito della perizia di variante e suppletiva in oggetto l’importo contrattuale netto passa da € 890,864.33  ad € 934.450,13 con un aumento di lavori netti di € 43.585,80 pari a c.a. il 4,9 % dell’importo contrattuale;
5)	di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento iniziale;
6)	di impegnare pertanto la maggiore spesa di €. 43,585.80  per lavori ed €  4,358.58 per IVA al 10% all’azione  nà3888 d “IPSIA FERRARI DI MARANELLO – ADEGUAMENTO SISMICO”, del PEG2007;
7)	di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

	 
                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento
                                                                                      Ing. Alessandro Manni
manni.a@provincia.modena.it

[INTESTAZIONE_PDF_2]