SERVIZIO EDILIZIA

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
I.P.S.I.A. "A. FERRARI" DI MARANELLO: PROGETTO ESECUTIVO D’ADEGUAMENTO SISMICO E D AMPLIAMENTO: 2° STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA 

Con determina dirigenziale n. 38  del  10/01/2007 veniva approvato il progetto esecutivo relativo all’adeguamento sismico ed ampliamento 2° stralcio dell’IPSIA Ferrari di Maranello (Modena) per un importo complessivo pari  a € 1.250.000,00  così suddiviso:    
 	 	 	 
A)	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (OG1)			€   803.498,22
B)	IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)				€   227.010,57	 
C)	ONERI SICUREZZA						€        6.996,94
	 		TOTALE LAVORI    			€ 1.037.505,73 
	
SOMME A DISPOSIZIONE	 	 
D)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (2%) 	 	€     20.750,11 	 
E)	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'	 €    47.500,00 	 
F)	IVA SUI LAVORI 10%	 				€    103.750,57 	 
G)	COLLAUDO	 						€     12.500,00 	 
H)	IMPREVISTI	 						€     23.500,00 	 
I)	SPESE PER ALLACCIAMENTI	 			€       4.000,00 	 
L)	SPESE PER AUTORITA'	 				€          400,00 	 
M)	ARROTONDAMENTI	 				€            93,58 	 
 	 	 	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 	€   212.494,27 
 	 	 	 
 			TOTALE	 	 			€ 1.250.000,00

La spesa per l’esecuzione dei lavori, trova copertura finanziaria ai residui 2007 delle azioni n. 3888  “IPSIA FERRARI DI MARANELLO – ADEGUAMENTO SISMICO”, con contributo altri enti e dell’ az. 3758 “I.P.S.I.A. FERRARI di Maranello adeguamento sismico” del Peg. 2008;
Con determina dirigenziale n° 509 del 04/06/2007 le opere venivano affidati all’impresa Allodi srl, con sede in Parma (Pr)  Via Argonne, 8bis, Cod. Fisc. e P.Iva 00145330346.
La seguente impresa, per i lavori in oggetto, ha offerto un ribasso percentuale pari al 14,23% e pertanto l’importo contrattuale netto è di € 883.867,39 oltre a € 6.996,94 per oneri di sicurezza, € 89.086,43 per IVA al 10% e, quindi, per l’importo totale complessivo di € 979.950,76.
I lavori sono stati consegnati parzialmente e con riserva il 02/07/2007 come risulta dal verbale prot. 37/2007 del 04/07/2007; solo successivamente, in data 30/08/2007, si è proceduto a consegnare in via definitiva i suddetti lavori, come risulta da relativo verbale, cosicchè l’ultimazione dei lavori debba avvenire entro il 29/08/2008.
In seguito alle operazioni concernenti la realizzazione di alcuni pilastri, per questioni imputabili a problemi di natura geometrica (necessità di mutare le dimensioni e profondità delle fondazioni) e geologiche (variazione della potenza e della profondità del banco di ghiaia con conseguente disassamento di alcuni pilastri), certamente non rilevabili con precisione in sede progettuale, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste in fase progettuale. In conseguenza a ciò ed alla modalità operativa di realizzazione dei nuovi impalcati, che contemplano una diversa sequenza di realizzazione delle strutture principali del nuovo impalcato di copertura, si è reso necessario apportare delle modifiche anche a delle strutture in elevazione, affinchè i lavori che si intendono realizzare non risultino in contrasto con il progetto esecutivo approvato in data 10/01/2007 con determina n. 38. 
Così sono stati previsti i seguenti interventi che consisteranno in:
-	incremento volume degli scavi in fondazione; 
-	disfacimento di alcune tramezze e rimozione serramenti per poter permettere lo spostamento di n° 3 pilastri dissasati (solo quelli interni lungo il corridoio principale); 
-	incremento della profondità di tre gruppi di pali di fondazione (causa brusca variazione profondità del banco di ghiaia sul lato sud-nord) al fine di incrementarne la portanza in fondazione;
-	incremento dei quantitativi di armatura di  alcune travi e pilastri a causa dei disassamenti;
-	incremento dei quantitativi di calcestruzzo strutturale per le maggiori dimensioni delle nuove travi e nodi strutturali;
-	incremento delle relative casseformi;
-	realizzazione di nuove travi di collegamento (trave reticolare di copertura) aggiunte solo al fine di irrigidimento dopo il disassamento dei pilastri.
 
Sentiti il Responsabile del Procedimento ed i progettisti, nonché coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza, il Direttore dei Lavori ha provveduto a disporre la redazione di una perizia di variante finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità ai sensi dell’art. 132 comma 1 e comma 3  della legge 163/06 e successive modifiche ed integrazioni per un importo netto di  € 934.450,13 di cui € 6.696,94  per oneri per la sicurezza con un aumento complessivo pari a  € 43.585,80.
L’impresa Allodi s.r.l., con sede in Parma (Pr) Via Argonne, 8 bis, Cod. Fisc. e P.Iva 00145330346, esecutrice dei lavori principali, interpellata, si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto principale per un importo netto di € 934.450,13 di cui € 927.753,19  per lavori ed € 6.696,94  per oneri per la sicurezza con un aumento complessivo pari a  € 43.585,80 pari a circa il 4,89 % dell’importo offerto, dunque inferiore al 5% dell’importo contrattuale così come previsto all’art. 132 comma 3 della legge 163/06.
Dato atto che quanto sopra descritto modifica il nuovo quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO 2° STRALCIO (a seguito di perizia)
A)	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (OG1)			€   732.746,22	
B)	IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)				€   194.706,97	 
C)	ONERI SICUREZZA						€       6.996,94	 
	 	TOTALE LAVORI    				€   934.450,13  
	
SOMME A DISPOSIZIONE	 	 
D)	INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE (2%) 	 	  €    21.621,83 	 
E)	DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'   €   42.500,00 	 
F)	IVA SUI LAVORI 10%	 				  €    93.445,01 	 
G)	COLLAUDO	 						  €      7.000,00 	 
H)	IMPREVISTI	 						  €            0,00 	 
I)	SPESE PER ALLACCIAMENTI	 			  €      4.000,00 	 
L)	SPESE PER AUTORITA'	 				  €         400,00 	 
M)	ARROTONDAMENTI	 				  €             0,00
SOMME ULTERIORI PER RIBASSO D’ASTA, IVA, D.L. 
E COLLAUDO 							  €   146.583,03 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				  €   315.549,87
 	 	 	 
 			TOTALE	 	 			 € 1.250.000,00

Il responsabile del procedimento è l’Ing.  Alessandro Manni  Direttore d’Area dei Lavori Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
Per quanto precede,

il Dirigente determina

1)	di approvare la perizia di variante e suppletiva per le motivazioni in premessa indicate redatta dal direttore dei lavori in data 26/05/2008 ai sensi dell’art. 132 della L. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, ed il nuovo quadro economico dei lavori  come in premessa suddiviso;
2)	di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione sono acquisiti agli atti con prot. 61638 del 10/06/2008  regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
3)	di affidare l’esecuzione dei nuovi maggiori lavori all’impresa Allodi srl , con sede in Parma (Pr)  Via Argonne, 8bis, Cod. Fisc. e P.Iva 0014533034, la quale ha offerto di eseguirli agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto d’appalto n° 27570 del 23/07/2007, giusto schema di atto di sottomissione firmato dalla Ditta per accettazione;
4)	di dare atto che a seguito della perizia di variante e suppletiva in oggetto l’importo contrattuale netto passa da € 890.864,33  ad € 934.450,13 con un aumento di lavori netti di € 43.585,80 pari a c.a. il 4,9 % dell’importo contrattuale;
5)	di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento iniziale;
6)	di impegnare pertanto la maggiore spesa di €. 47.944,38 (di cui 43,585.80  per lavori ed €  4,358.58 per IVA al 10%) al res. n. 7211/07 all’azione  n. 3758 “IPSIA FERRARI DI MARANELLO – ADEGUAMENTO SISMICO” del PEG 2008;
7)	di prorogare all’ impresa esecutrice il termine contrattuale per l’ ultimazione dei lavori di 45 gg. naturali e consecutivi.
8)	di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

                                                                                              [INTESTAZIONE_PDF_2]