AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO EDILIZIA

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del  [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
CAPANNONE SEDE DEL CENTRO OPERATIVO UBICATO IN COMUNE DI FRASSINORO LOCALITA’ MADONNA DI PIETRAVOLTA. REALIZZAZIONE DI N° 2 DEPOSITI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CUP G73H06000010003). 

Con determinazione n. 1023 del 17/10/2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Edilizia, per un importo complessivo pari a € 35.000,00 di cui € 27.377,20 per lavori, € 1.200,00 per sicurezza, € 5.715,44 per I.V.A. e € 707,36 per somme a disposizione.
La spesa complessiva di € 35.000,00 veniva finanziata con BOP all’azione n. 636 del P.E.G. 2006 “Capannone per la viabilità –M.S.” del PEG 2006.
Con medesima determinazione si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante richiesta scritta di preventivi offerta ad almeno tre ditte di fiducia dell’amministrazione in possesso dei necessari requisiti.
Con determinazione n. 182 del 26/02/2007 si aggiudicavano i lavori in oggetto all’Impresa Vignaroli L. & C. Snc via Fontanone n° 9 – 41047 Piandelagotti (Mo) - P. I.V.A. 01646940369 la quale offriva un ribasso percentuale del 2,20%, e quindi per un importo contrattuale netto di € 27.974,90 di cui € 26.774,90 per lavori ed € 1.200,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto n. 1643 del 23/07/2007 del Registro scritture private. 
I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi in data 31/10/2007, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori ha redatto in data 31/10/2007 il certificato di regolare esecuzione, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 27.952,56 con una minore spesa di € 22,34 rispetto all’importo contrattuale.
In corso d’opera sono stati corrisposti all’impresa n. 1 stati d’avanzamento lavori per € 25.847,12 pertanto rimane un credito residuo di € 2.526,52 ( € 2.105,44 per lavori ed € 421,08 per I.V.A. 20%).
In data 11/12/2007 con Prot. n° 140292/5.2.3.8. fasc. 6 la verifica della regolarità contributiva (Durc) effettuata dall’ufficio Edilizia relativa all’impresa suddetta è terminata con esito positivo.
La ditta ha presentato a garanzia della rata, così come previsto dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria della Zurich n° 117D5651, della durata di 26 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione per l’importo di € 2.219,48.
Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2007 sottoscritto dall’impresa senza lacuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2007.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato. 
	Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
	Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .
Per quanto precede,

il Dirigente determina

1)	di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di €. 27.952,56 di cui €. 26.752,56 per lavori e €. 1.200,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 22,34 rispetto all’importo contrattuale pari a € 27.974,90 in esecuzione del contratto n. 1643 del 23/07/2007 del Registro scritture private;
2)	di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 33.543,07 di cui €. 26.752,56 per lavori, €. 1.200,00 per oneri della sicurezza e € 5.590,51 per I.V.A. al 20 % , con una minore spesa di € 26,81 rispetto all’importo impegnato pari ad € 33.569,88;
3)	di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 16571 del 18/02/2008 regolarmente firmato e con apposizione del timbro dell’ente;
4)	di approvare il saldo finale dei lavori;
5)	di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 27.952,56 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 1 acconti all’impresa Vignaroli L. & C. s.n.c. P. I.V.A.  01646940369 per un importo di €. 25.847,12 oltre I.V.A., rimanendo pertanto € 2.105,44 oltre a € 421,08 per I.V.A. al 20 % a credito dell’impresa;
6)	di liquidare pertanto la somma complessiva di € 2.526,52 all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento emesso con imputazione al sub-res 540/07 del residuo 5158/06 dell’azione n. 636 “Capannoni per la viabilità - Manutenzione straordinaria” del P.E.G. 2008; 
7)	di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 26,81 che si libera sull’azione succitata;
8)	di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto esecutivo e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Q. E. di Progetto	Q.E. a consuntivo	
	€uro	€uro	
Importo lavori	27.377,20	26.752,56	
Oneri per la sicurezza 	1.200,00	1.200,00	
Sommano per lavori	28.577,20	27.952,56	
			
Somme a disposizione:			
I.V.A. al 20 % 	5.715,44	5.590,51	
Spese Tecniche: 2 % 	571,54	571,54	
Spese pubblicità e contributo	50,00		
Arrotondamenti	85,82		
Totale somme a disposizione	6.422,80	6.162,01	
			
Importo complessivo	35.000,00	34.114,61	

9)	di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una economia in ragione di quanto sopraesposto di € 885,40 che si accerta come segue:
quanto a € 26,82 dal sub-res 540/07 al res 5158/06;
quanto a € 85,82 dal sub-res 539/07 al sopraccitato residuo;
quanto a € 772,76 al res 5158/06 dell’az. 636 “Capannoni per la viabilità – Manutenzione      straordinaria” del PEG 2008;
10)	di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall’art. 22 del C.S.A., polizza fidejussoria della Zurich, della durata di 26 mesi a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione per l’importo di € 2.219,48;
11)	di approvare la restituzione della polizza fidejussoria n. 117D4701 rilasciata a garanzia del contratto n. 1643 del R.S.C. del 23/07/2007, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 40 c. 7 D.lgs n. 163/2006
12)	di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Vignaroli L. & C. s.n.c. Via Fontanone n° 9 41047 Piandelagotti (Mo).

		[INTESTAZIONE_PDF_2]

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                    _________________