SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
COMPLETAMENTO VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA ALLE SP. 467 E 569 DEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO. 3^ STRALCIO: DALLA LOCALITA' ERGASTOLO ALLA LOCALITA' S. EUSEBIO. INTEGRAZIONE CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE. MAGGIORE COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALLO STUDIO INGEGNERI RIUNITI PER PROROGA TERMINI E SCAVI ARCHEOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA.  

Con contratto Rep. n. 383 del 01/10/2001 e  determina dirigenziale n. 142 del 20/06/2001 si prevedeva l’affidamento allo studio tecnico professionale Ingegneri Riuniti s.p.a.. con sede in Modena, via Pepe n. 15, C.F. 00966570418 P.IVA 01986430369  della progettazione del tratto di Pedemontana da Pozza di Maranello fino alla località Ergastolo di Spilamberto da realizzare in 3 stralci, di cui il primo si riferiva agli svincoli sfalsati negli incroci Ghiarola Vecchia e Canaletto su tratto di Pedemontana già esistente, il secondo al nuovo ponte sul T.Tiepido, il terzo al tratto di collegamento fra Solignano e Ergastolo . 
 	L’incarico comprendeva l’intero progetto preliminare e le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva a stralci.
Tale incarico venne successivamente modificato con Determina 638-06 ed  integrato con la Determina 181-07, e con Determinazione n°  1  del  02/01/2007 venne conferito allo stesso un incarico per la  Direzione Lavori dei lavori in oggetto;
Con determinazione dirigenziale n. 1177  del  18/12/2006 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo relativo al  lavoro in oggetto per un importo a base d’asta pari a € 7.746.900,00 di cui € 152.000,00 per oneri relativi alla sicurezza  e le conseguenti modalità di scelta del contraente.
Con Determinazione n°  664 del  19/07/07 si procedeva a seguito dell’espletamento delle procedure d’appalto ad  affidare  il lavoro in oggetto al CONSORZIO STABILE CO.SEAM con sede a Modena in via P.P. Pasolini n. 15.
Con Determinazione n°  93 del 22/07/2008 si decideva di provvedere all’integrazione dell’incarico affidato allo Studio Ingegneri Riuniti s.p.a. con sede in Modena via Pepe n. 15 c.f. 00966570418, con le seguenti prestazioni professionali:
-	Redazione della perizia di variante e suppletiva: compenso € 27.675,00
-	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sull’importo contrattuale complessivo calcolato sulla base delle tariffe vigenti scontato del 20% + 20%; compenso € 38.000,00;
 per complessivi netti € 65.675,00 giusto contratto RSP 1860 del 2/9/2009;
Con  Determinazione n°  92 del 21/07/2008, Determinazione n°  144 del 22/09/2008 e Determinazione n°  19 del 26/02/2009 venne approvato un primo intervento  PER SCAVO ARCHEOLOGICO DI UN POZZO ROMANO IN AREA INTERFERENTE CON IL CANTIERE. 
La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, in data 4/12/2008 con lettera Prot. N. 13814 Pos B/5, dando il nulla osta alla prosecuzione dei lavori nelle aree in cui si erano appena terminati gli scavi archeologici, ha richiesto, per il prosieguo dei lavori nelle aree adiacenti, il controllo archeologico in corso d’opera.
Con Determinazione n°  42 del 23/04/2009 si prendeva atto della  nota prot 3777 B/5 del 31-03-09 pervenuta il 1-04-09 prot 33204/7.5.467.2 F. 8, con la quale la Soprintendenza per i beni Archeologici segnalava che in occasione dei lavori di prosecuzione del cantiere, erano emersi nuovi reperti a circa 20 mt dallo scavo precedente e così descrivibili:
-	materiali databili dalla tarda età del ferro (si segnala un frammento di braccialetto in pasta vitrea), alla età romana (frammenti di ceramica, vetri, laterizi e mattonelle pavimentali a coda di pavone); 
-	zona verosimilmente riferibile ad una discarica di laterizi romani.
e conseguentemente  si disponeva per un primo intervento di indagine. 
Con tali nuovi controlli sono stati in effetti scoperti almeno altri 3 reperti archeologici e pertanto si rendono necessari ulteriori lavori per i quali è stato necessario formulare preventivo di spesa da sottoporre alla Committenza, e si dovrà procedere ad una ulteriore integrazione del piano di sicurezza ed al controllo di una seconda impresa in cantiere per i successivi scavi.
            Attualmente il cantiere è in sospensione in attesa dell’avvio e del compimento  di queste ulteriori ricerche archeologiche.
I lavori principali sarebbero dovuti terminare il 16 Aprile 2009 e  se fosse possibile dare oggi la ripresa dei lavori essi dovrebbero protrarsi fino al 5 agosto 2009, ma tale ripresa sarà possibile solo al termine dei lavori di archeologia in quanto assolutamente interferenti con i lavori principali,
La D.L. ha segnalato che sarà necessario approntare un progetto per gli ulteriori scavi archeologici, che dovrà necessariamente essere redatto dalla stessa D.L. in quanto all’interno del cantiere delle opere principali.
Conseguentemente  i lavori principali subiranno un prolungamento per cause impreviste ed imprevedibili non inferiore a 111 giorni (differenza fra 16 aprile e 5 agosto), ma presumibilmente vicino ai 200 gg. naturali e consecutivi (a fronte dei 255 gg. previsti dal contratto per l’esecuzione di tutte le opere), 
In relazione a quanto sopraddetto in data 23-06-09 prot. 63754/7.5.467.2 F.8, lo Studio Ingegneri Riuniti s.p.a. con sede in Modena via Pepe n. 15 c.f. 00966570418 ha prodotto richiesta di  aggiornamento del compenso per la redazione del progetto per gli ulteriori scavi archeologici e per il prolungamento dei tempi di direzione lavori e sicurezza dell’intero cantiere di €. 14.000,00 oltre a INARCASSA 2% e IVA 20% per un totale di €. 17.136,00.
Tale cifra è prevista nel Quadro Economico della seconda perizia suppletiva e di variante approvata con Determinazione n°  82 del 24/06/2009, alla voce spese tecniche.
	L’art. 90 comma 6 del D.Lgs. n.163/06 prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici possano, in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, a soggetti esterni.
	Il Responsabile del Procedimento Manni Ing. Alessandro accerta e tramite il presente atto certifica che sussistono le condizioni succitate e che non è possibile portare a termine tali incombenze nei tempi prestabiliti, per carenza di organico.
Si attesta che l’incarico è affidato nel rispetto delle norme di legge e di quanto previsto dai vigenti regolamenti provinciali per la disciplina dei contratti e per il conferimento degli incarichi.
Preso atto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto e con la quale si conferma che gli incarichi affidati ai sensi del D.Lgs. 163/06 (ex Legge Merloni) sono esclusi dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2.
Dato atto che l’incarico conferito con il presente atto è ricompreso nel quadro economico del progetto e, pertanto, è escluso dal computo del limite massimo di spesa annuo per incarichi stabilito all’art. 11 del regolamento.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Alessando Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
	Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
	Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .
Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1)	di provvedere per i motivi in premessa esposti all’integrazione dell’incarico affidato allo Studio Ingegneri Riuniti s.p.a. con sede in Modena via Pepe n. 15 c.f. 00966570418, mediante   aggiornamento del compenso per la redazione del progetto degli ulteriori scavi archeologici e per il prolungamento dei tempi di direzione lavori e sicurezza dell’intero cantiere di €. 14.000,00 oltre a INARCASSA 2% e IVA 20% per un totale di €. 17.136,00;
2)	di dare atto che l’importo contrattuale passa da € 165.471,58 ad € 179.471,58;
3)	di procedere alla  revisione in aumento delle competenze di cui al richiamato disciplinare di incarico professionale rsp. N. 1594 del 1-03-07 e rsp 1860/09 del 2/9/08;
4)	di modificare il disciplinare di incarico riportato nella determinazione n. 1 del 2/1/07 e contratto RSP 1594/07 e successivo contratto RSP n. 1860/09 come segue:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto la direzione lavori, la redazione di perizia di variante e suppletiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’ intervento riguardante il “COMPLETAMENTO della VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA alle S.P.467 - S.P.569 nel TRATTO FIORANO SPILAMBERTO. 3° STRALCIO: DALLA LOCALITA’ ERGASTOLO ALLA LOCALITA’ S. EUSEBIO” ed agli interventi resesi necessari a seguito del ritrovamento di numerosi ed importanti reperti di epoca romana.	
Art. 3 - Modalita’ di svolgimento, procedure, competenze, prestazioni professionali
L’incarico in questione sarà coordinato dal Direttore dell’Area Lavori Pubblici  Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Manni.
Il professionista incaricato svolgerà l’incarico suddetto secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione Provinciale  nel rispetto di ogni norma vigente di carattere tecnico, contabile, giuridico e tariffario e, in particolare, delle norme applicabili delD.Lgs. 163/06. 
Il professionista resta comunque obbligato alla osservanza del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
L’incarico prevede specificatamente le seguenti attività:
1.	Direzione dei lavori e relativo Ufficio ai sensi dell’art. 130 D.Lgs 163/06 e art. 123 DPR 554/99 ove effettivamente necessario;
2.	Contabilità dei lavori; 
3.	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
In particolare l'incarico comprende le seguenti specifiche prestazioni: 
- fornire all'Impresa in tempo utile tutti i particolari e dettagli esecutivi che si rendessero eventualmente necessari; 
- vigilare sull'osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, con obbligo di periodico rendiconto; 
- controllare le ditte operanti nel cantiere, se ed in quanto regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Provinciale  ad operare in subappalto, per quanto concerne il rispetto dei limiti d'importo autorizzati. 
Di concerto con il Responsabile del procedimento il professionista, direttore dei lavori, provvederà alla verifica di tutta l'attività legata all'approntamento del cantiere quale le comunicazioni obbligatorie all'ASL ex art.11 D.Lgs 494/96, agli istituti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE ed alle aziende erogatrici di servizi che possono subire pregiudizi dall'esecuzione dei lavori (Telecom, Enel, Gas e Acquedotto...). 
Art. 5 - Corrispettivo dell’incarico
Il compenso per la prestazione di cui al precedente art. 1) è integrato  forfettariamente con  €. 14.000,00 oltre a INARCASSA 2% e IVA 20% per un totale di €. 17.136,00.
5)	di dare atto che copia della presente determinazione verrà trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti;
6)	di dare atto che saranno pubblicati sul sito Internet dell’Ente, gli estremi dei provvedimenti dirigenziali di affidamento dell’incarico, completi dei riferimenti identificativi del collaboratore dell’oggetto dell’incarico, del compenso e della durata;
7)	di impegnare la somma ulteriore di €. 17.136,00 al res. 3764/04 dell’azione n° 3115/2 “S.P.569 Pedemontana-quota a carico Regione Emilia Romagna” del Peg 2009;
8)	 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 [INTESTAZIONE_PDF_2]