SERVIZIO LAVORI SPECIALI

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO: S.P. N.23 “DI VALLE ROSSENNA” - PROGR. KM. 5+850. LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENNA IN LOCALITA’ TALBIGNANO IN COMUNE DI POLINAGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI EURO 1.006.664,58) E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI. 

Il Ponte di Talbignano realizzato nel 1923, sulla SP n.23 di Valle Rossenna risulta in condizioni di grave degrado strutturale per quanto riguarda l’impalcato e gli archi principali;  la struttura del ponte è stata ricostruita sui due archi nel dopoguerra a seguito di bombardamenti.
Negli anni ’60 è stata sottomurata la fondazione di una pila a seguito dell’abbassamento dell’alveo del torrente Rossenna e successivamente a seguito del crollo dei muri in bozze è stata ricostruita la spalla in sinistra idraulica con strutture prefabbricate in c.a..
Attualmente  il transito è limitato a senso unico alternato essendo la larghezza totale dell’impalcato pari a 3,50 ml; si tratta di uno degli ultimi manufatti esistenti nella rete viaria della Provincia di Modena a senso unico alternato.
A seguito degli studi preliminari sui calcestruzzi degli archi principali è apparsa evidente l’impossibilità di consolidare e potenziare la struttura esistente per rendere il transito a doppio senso di marcia e che pertanto si è deciso di intervenire con il completo rifacimento dell’impalcato, delle pile lasciando in opera solo le spalle laterali pur soggette a potenziamento e consolidamento.
Nel Piano Triennale degli Investimenti  era stato previsto per l'anno 2003, con imputazione all’azione 2448,  “SP23 Nuovo Ponte di Talbignano”  per un importo complessivo di € 1.300.000,00 finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.; inoltre nel 2006 sono stati emessi BOP per complessivi € 150.000,00 a seguito di adeguamento del computo metrico estimativo.
L’inizio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 è stato notificato ai proprietari dei terreni interessati alle procedure d’esproprio con lettera prot. 99433/7.5.23.2 fasc.2  del 24/09/03.
L’inizio del procedimento espropriativi ai sensi del DPR 327/01 è stato notificato ai proprietari dei terreni e degli immobili interessati alle procedure di esproprio con lettera prot. 108237 del 16/10/2003.
Nessun  proprietario dei terreni ha espresso osservazioni o richiesto di essere inseriti nel procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, e sono trascorsi i tempi previsti delle norme per la notifica e per il deposito degli elaborati del progetto definitivo.
Con determina  n.741 del 20/10/2003 è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell’importo complessivo di € 1.300.000,00 e che con determina n. 1026 del 18/10/2006 è stato aggiornato il quadro economico dell’importo complessivo di € 1.450.000,00.
Con determina n. 398 del 29/04/2004 sono stati impegnati  € 4.497,60 per il frazionamento catastale delle aree soggette ad occupazione definitiva, approvato dall’UTE di Modena con prot. 209537/209541 del 23/05/2005.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici dell’Emilia Romagna ha rilasciato l’autorizzazione di competenza con lettera prot. 6457 del 08/05/2006 assunta agli atti della Provincia con prot. 66272  del 15/05/2006.
Il Comune di Polinago ha rilasciato il parere di conformità con lettera protocollo 836 del 25/05/2006 ai sensi dell’art.7 L.R. n.31/2002” assunta agli atti della Provincia con prot. 73586/7.5.23.2 fasc.6 del 30/05/2006.
 	Il Servizio Tecnico di Bacino  Enza Panaro Secchia della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il proprio nulla osta al progetto definitivo con lettera prot. 90180 assunta agli atti della Provincia con prot. 45568 del 16/04/2007.
Sono state sottoscritte le convenzioni bonarie con tutti i proprietari; le convenzioni sono state tutte approvate con determine come di seguito evidenziato:

 	 	occupaz.	determina	accordo	
1	Soc. Immobiliare Modenese	definitivo	910 del 24/10/2007	prot. 153009 del 04/12/06	
2	Peli Maria	definitivo	1069 del 19/12/2007	prot. 8377 del 22/01/07	
2a	Peli Maria	temporaneo	895 del 19/10/2007	prot. 8382 del 22/01/07	
4	Rosi Edvige	temporaneo	988 del 30/11/2007	prot. 32260 del 14/03/07	
5	Bassano Olga, Cantelli Donatella, Cantelli Lorenzo, Cantelli Paolo, Cantelli Silene	temporaneo	11 del 19/02/2008 approvazione	Prot. 8324 del 22/01/2007	
6	Linea C10 Srl	temporaneo	894 del 19/10/2007	prot. 153005 del 04/12/06	
7	Rosi Nereo	definitiva	1067 del 19/12/2007	prot. 67345 del 04/06/07	
7a	Rosi Nereo	temporaneo	930 del 07/11/2007	prot. 67344 del 04/06/07	
8	Ternelli Francesco, Ternelli Maria Rosa, Ternelli Marino, Ternelli Marisa, Ternelli Mauro	definitivo	1066 del 19/12/2007	prot. 32229 14/03/07	
8a	Ternelli Francesco, Ternelli Maria Rosa, Ternelli Marino, Ternelli Marisa, Ternelli Mauro	temporaneo	990 del 30/11/2007	prot.32240 del 14/03/07	
9	Bergamini Gaetano, Zanni Giulia	temporaneo	928 del 05/11/2007	prot. 153000 del 04/12/06	

Con determina n. 695 del 25/07/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari  per sistemazione accessi  e recinzioni per complessivi € 31.476,00, successivamente affidati con determina n. 796 del 05/09/2007 e attualmente in corso di realizzazione.
Con determina n.1053 del 14/12/2007  è stato affidato l’incarico di consulenza alla progettazione per complessivi € 22.032,00.

In data 24/01/2008 sono stati redatti i Verbali stato di consistenza e di immissione in possesso e sono pervenuti le accettazioni dell’indennità provvisoria :
 
	Verbale 	Accettazione indennità provvisoria	
Peli Maria	Prot. 10233 del 30/01/2007	Prot. 18045 del 20/02/2008	
Rosi Nereo	Prot. 10227 del 30/01/2007	Prot. 10228 del 30/01/2008	
Ternelli Francesco e altri 	Prot. 10247 del 30/01/2008	Prot. 12581 del 06/02/2008	

Il Servizio Lavori Speciali Strade ha pertanto redatto il progetto esecutivo per complessivi € 1.450.000,00 di cui € 1.006.664,58 per lavori, € 201.332,92 per IVA al 20% ed € 242.002,50 per somme a disposizione, come di seguito specificato:

1) 	Lavori a base d’asta a corpo
Di cui € 70.466,52 per oneri di sicurezza		€  1.006.664,58	
2) 	Iva al 20%		€     201.332,92	
3) 	Somme a disposizione 			
	Spese tecniche (2%)	€     20.133,29		
	Spostamenti servizi HERA (linea MT)	€     17.000,00		
	Spostamento servizi Telecom	€       3.000,00		
	Espropri 	€     48.593,41		
	Imprevisti (IVA compresa)	€   106.843,80		
	Spese di collaudo e progettazione	€     34.032,00		
	Spese di pubblicazione gara e BUR	€       7.000,00		
	Spese per Autorità Lavori Pubblici	€          400,00		
	Spese per Prove di Laboratorio	€       5.000,00		
	Sommano		€    242.002,50	
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 1.450.000,00	

La spesa di €. 1.450.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con A.D. 741/03 e A.D. 1026/06.
E’ presente nel progetto il  piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lvo 494/96 e che il costo della sicurezza è stato valutato pari a €. 70.466,52.
	In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo solamente alla stesura del progetto esecutivo.
	All’affidamento dei lavori si provvedera’ attraverso una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo l’art.82 comma 2 del DLgs n.163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art 122 comma 9 del DLgs n.163/2006.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un contributo a favore Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Roma e a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione del contraente. 
Occorre quindi disporre il pagamento di complessivi € 400,00 per la suddetta selezione, codice identificativo gara (C.I.G.) n. 0145201FA3.
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato a AUT. CONTR. PUBB. Via di Ripetta 246, 00186 Roma (cod. fisc. 97163520584) 
- mediante versamento on line collegandosi al portale web “sistema di riscossione “ all’indirizzo http://riscossione.avlp.it  seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
Si ritiene conseguentemente provvedere in merito.
	Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area  Ing. Alessandro Manni.
	Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it .
	Per quanto precede,

il Dirigente determina

1)	di approvare il progetto esecutivo dei lavori:  S.P. N.23 “di VALLE ROSSENNA” - PROGR. KM. 5+850. LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE ROSSENNA IN LOCALITA’ TALBIGNANO in Comune di Polinago dell'importo complessivo di € 1.450.000,00 di cui € 1.006.664,58 per lavori, € 201.332,92 per IVA al 20% ed € 242.002,50 per somme a disposizione, come in premessa specificato;
2)	di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l’ ”originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 33765 del 31/03/2007 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
3)	di dare atto che la spesa complessiva di € 1.450.000,00 è  finanziata come segue:
•	quanto ad € 1.300.000,00 al res. 5071/03 presente all’azione n. 2448 “SP23 Nuovo ponte di Talbignano” del P.E.G. 2008 (mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4446428/00)
•	quanto ad € 150.000,00 al res. 5182/06 della suddetta azione 2448 del P.E.G. 2008 (Buoni Ordinari Provinciali)
4)	di stabilire che l’affidamento dei lavori verrà effettuato attraverso una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo l’art.82 comma 2 del DLgs n.163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art 122 comma 9 del DLgs n.163/2006;
5)	di dare atto che il codice identificativo gara  C.I.G. e’ il n. 0145201FA3;
6)	di impegnare la somma di €. 400,00  al res. 5182/06 dell’azione n. 2448 del P.E.G. 2008                                        quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza;
7)	di individuare, quale creditore per il contributo suddetto l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Roma,  per un importo di complessivi € 400,00;
8)	di provvedere al pagamento della suddetta somma entro e non oltre 30gg decorrenti dalla data del 31/03/2008;
9)	di stabilire che il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono individuati nella persona dell’Ing. Eugenio Santi;
10)	di stabilire che, il responsabile del procedimento, è stato individuato nella persona del dott. Ivano Campagnoli.
11)	di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

[INTESTAZIONE_PDF_2]