SERVIZIO LAVORI SPECIALI

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
S.P. 569 DI VIGNOLA  VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO. LAVORI  URGENTI DI CAVIDOTTI E ATTRAVERSAMENTIPER SERVIZI ED IMPIANTI IRRIGUIAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ,  NUOVO QUADRO ECONOMICO  AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA 

Con determina n.1170 del 07/12/2006 è stato approvato il  progetto esecutivo in oggetto
dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 75.653,73 per lavori a base d’asta, € 15.130,75 per  IVA al 20% e € 9.215,52 per somme a disposizione come di seguito specificato:

a)	Lavori a base d’asta a misura
di cui € 2.269,61 (pari al 3%) per oneri di sicurezza		€     75.653,73	
b)	IVA al 20% su € 75.653,73		€     15.130,75	
c)	Somme a disposizione			
	Spese tecniche 	€      1.513,07		
	Imprevisti (IVA compresa)	€      7.652,45 		
	Contributo autorità di vigilanza	€           50,00		
	Sommano		€      9.215,52	
				
	IMPORTO COMPLESSIVO		€   100.000,00	

Con la stessa determina n. 1170 del 07/12/2006 i lavori sono stati affidati a trattativa diretta all’Impresa cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. via G. Pastore n° 27 – 41033 Concordia s/S  (MO), P.IVA 00154960363, per netti €  75.653,73 oltre l’IVA al 20%, come da contratto RSP n° 1602 del 23/03/2007.

Durante l’esecuzione dei lavori principali si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili per cui sono state apportate modifiche sostanziali, formalizzate con perizia di variante tecnica e suppletiva, che hanno dato adito a nuovi o a diversi interventi alle interferenze in oggetto, rendendo necessaria una variazione alle opere di intervento già progettate.

I fatti imprevisti ed imprevedibili hanno richiesto l’intervento dell’impresa affidataria a più riprese, in tempi diversi per risolvere le interferenze, spostare le tubazioni, predisporre gli scavi ecc. necessari a tutti gli enti gestori dei servizi pubblici; i servizi pubblici così non saranno mai sospesi e di conseguenza non potranno essere inoltrate richieste di danni all’Amministrazione Provinciale.
La stessa ditta appaltatrice dei lavori principali della Pedemontana non avrà quindi interruzioni  del lavoro principale e motivo di richiedere danni o risarcimenti.
Gli stessi proprietari dei terreni interessati dagli impianti irrigui interrotti con la costruzione della nuova strada e ora da completare, contemporaneamente all’esecuzione delle tubazioni di attraversamento, con gli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva potranno risolvere le interferenze senza ulteriori richieste di danni all’Amministrazione per il mancato funzionamento degli impianti di irrigazione e delle celle frigorifere.

Le varianti al progetto principale relativo a cavidotti ed impianti irrigui sono perciò riassumibili come segue:

1)	interferenza telecom n° 6 cavidotto in corrispondenza dello scatolare di via Garofalana OA06. Occorre eseguire una nuova predisposizione per il cavo telecom 200 coppie collegata in n.3 pozzetti 60x600 per consentire lo spostamento definitivo della linea ora posata provvisoriamente su pali; 
2)	interferenza linea aerea 15.000 Hera spa in corrispondenza del nuovo cavalcavia di via Magazzino. I lavori principali prevedevano l’esecuzione di un breve tratto di tubo camicia con il metodo della spingitubo, ma per le caratteristiche del terreno riscontrate, particolarmente ghiaioso e per la presenza imprevedibile di grossi trovanti proprio, questo metodo non è stato tecnicamente realizzabile. 
Inoltre su richiesta dei nuovi tecnici Hera, ente subentrato ad Enel nel corso dei lavori, le  metodologie e le tipologie costruttive sono state modificate 
E’ stata quindi concordata la posa di un doppio cavidotto dal primo palo esistente fino all’ultimo, che elimina il tratto di linea elettrica in aereo, comprensivo di 4 pozzetti di dimensioni 200 x 100 non previsti da Enel nel progetto principale e lo scavo del rilevato delle rampe del cavalcavia il suo ripristino, anch’esso non previsto.
3)	Richiesta di HERA spa per la fornitura e posa mediante il fissaggio, tramite staffe zincate, di n.2 controtubi in acciaio DN200 sul cavalcavia di via Confine OA03 per il passaggio dei  servizi tecnologici acqua e gas, indispensabili alla gestione dei servizi pubblici.
4)	Richiesta di  HERA spa per il fissaggio, tramite staffe zincate, di n.1 controtubo in acciaio DN400 sull’impalcato della soletta del sottopasso di via garofalana OA06, per l’attraversamento di tubazione d’acquedotto.
5)	interferenze con le proprietà. Nell’ambito dei lavori si rende necessaria la realizzazione di tratti di recinzioni in alcune proprietà interessate dai lavori in oggetto per la sicurezza degli abitanti in prossimità dei fronti di scavo e l’esecuzione di particolari pezzi speciali e opere relative agli impianti irrigui.

Durante l’esecuzione delle opere si sono resi necessari alcuni lavori aggiuntivi di dettaglio come maggiori lavorazioni di mano d’opera e noleggi di automezzi per piccole lavorazioni in economia.

La perizia di variante e suppletiva risulta di importo maggiore del 30% rispetto alla perizia originaria, ma la necessità di intervenire immediatamente e con tempestività in tutti gli interventi citati, al fine di  evitare costose interruzioni dei pubblici servizi e dei lavori principali, richiede necessariamente di non interrompere le lavorazioni e l’appalto in essere con la ditta affidataria dei lavori originali.

Pertanto, il Direttore dei Lavori, sentiti il responsabile del procedimento e il progettista, ha  proceduto a redigere una PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
VARIANTE E SUPPLETTIVA per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi del comma 1b  dell’art.132 del DLgs 163/06;
SUPPLETTIVA per la risoluzione di aspetti di dettaglio, minore del 10% e non soggetta a “variante” ai sensi del comma 3 parte prima dell’art. 132 del DLgs 163/06
per un importo complessivo pari € 127.844,74 e a un  VERBALE DI NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25.05.1895 n.350, come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, con n. 9 nuovi prezzi unitari, per un importo aggiuntivo netto pari a € 29.137,04 e così l’importo netto dei lavori in appalto viene  fissato  in  € 104.790,77.
    
I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il sottoscritto Direttore dei lavori geom. Alberto Garuti e il direttore tecnico dell'Impresa geom. Leonardo Luppi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

La somma complessivamente impegnata risulta perciò pari a complessivi € 127.844,74 con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 29.137,04, così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 104.790,77.
Risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza non soggetta al ribasso d’asta, che in totale risulta essere € 3.173,72 pari al 3% dell’importo lordo.

La Direzione Lavori giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante e suppletiva alla stessa Impresa cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. via G. Pastore n° 27 – 41033 Concordia s/S  (MO) P. IVA 00154960363, affidataria dei lavori principali.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Pertanto si è proceduto a redigere una perizia di variante e suppletiva, e un nuovo quadro economico, per un importo complessivo invariato,  così suddiviso:

1)	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta
di cui € 2.269,61 per oneri di sicurezza	€  75.653,73		
	Lavori a misura perizia di variante al netto del ribasso d’asta
di cui € 874,11 per oneri di sicurezza	€   29.137,04		
	Lavori  totali al netto del ribasso d’asta		€    104.790,77	
2)	IVA 20% su € 104.790,77		€      20.958,15	
3)	Somme a disposizione			
	- Spese Tecniche	€      1.513,07		
	- Spese Tecniche aggiuntive 2% Perizia	€        582,75		
4)	- Compenso per occupazione temporanea terreni	
€        896,70		
5)	Contributo Autorita’	€          50,00		
	sommano		€        3.042,52	
				
	IMPORTO COMPLESSIVO		€     128.791,44	

La suddetta Perizia comporta una maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento iniziale di €. 28.791,44
La spesa per i nuovi maggiori lavori pari a € 34.964,44 oltre ad € 582,75 per spese tecniche aggiuntive trova copertura finanziaria all’azione 3630 del P.E.G. 2008 come segue:
-	quanto a €. 6.755,75 al sub-res.2685/06 – res. 7335/04 (imprevisti da quadro economico lavori in oggetto approvati con A.D. 1170/06)
-	quanto a €. 28.791,44 al res. 7344/04 (somme a disposizione da quadro economico perizia di variante lavori principali approvata con A.D. 572/07)
Si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale previsto pari a 60 giorni naturali e consecutivi.
		Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.
		Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato dovrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it
		Per quanto precede

Il dirigente determina

1)	di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui all’oggetto  per le motivazioni in su esposte e qui integralmente richiamate redatta dal Servizio Lavori Speciali in data 15/3/08 ai sensi dell’Art. 132 del DLgs 163/06 come in premessa specificato;
2)	di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
3)	di approvare il Verbale Nuovi prezzi contemplante  n. 9 nuovi prezzi unitari a misura;
4)	di dare atto che la perizia di variante e suppletiva, l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e i disegni, sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. N._______ del _____ regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
5)	di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
6)	di affidare l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva all’Impresa cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. via G. Pastore n° 27 – 41033 Concordia s/S  (MO) P. IVA 00154960363, la quale ha offerto di eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale giusto schema di atto di sottomissione firmato dalla Ditta per accettazione; 
7)	di dare atto che rispetto alla perizia dei lavori originaria l'importo netto dei lavori ammonta a € 104.790,77 determinando un aumento contrattuale di € 29.137,04, come indicato in premessa, come risulta dallo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
8)	di dare atto che il presente provvedimento comporta una maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento iniziale di €. 28.791,44  che trova copertura come in premessa specificato;
9)	di impegnare pertanto la somma di €. 34.964,44 all’azione 3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P. 255, 569 e 467” del P.E.G. 2008 come segue:
-	quanto a €. 6.173,00 al sub-res.2685/06 – res. 7335/04 (imprevisti da quadro economico lavori in oggetto approvati con A.D. 1170/06)
-	quanto a €. 28.791,44  al res. 7344/04 (somme a disposizione da quadro economico perizia di variante lavori principali approvata con A.D. 572/07)
10)	di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva  occorre una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi;
11)	di dare atto che a seguito della perizia di variante in parola, le spese tecniche subiscono un incremento di €. 582,75 che si prenotano  al sub- res 2685/05 – Res. 7335 della succitata azione 3630 del P.E.G. 2008;
12)	di provvedere all’adeguamento della polizza fidejussoria relativa al contratto R.S.P. 1602 del 23/3/07;
13)	di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[INTESTAZIONE_PDF_2]