SERVIZIO LAVORI SPECIALI

[INTESTAZIONE_PDF_1]

Determinazione n°  [N_DETERMINA] del [_TAG_FIRMA_DIGITALE_]

OGGETTO :
S.P. 569 DI VIGNOLA  VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL’ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO. LAVORI  URGENTI DI CAVIDOTTI E ATTRAVERSAMENTIPER SERVIZI ED IMPIANTI IRRIGUIAPPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ,  NUOVO QUADRO ECONOMICO  AFFIDAMENTO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA 

Con determina n.1170 del 07/12/2006 è stato approvato il  progetto esecutivo in oggetto
dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 75.653,73 per lavori a base d’asta, € 15.130,75 per  IVA al 20% e € 9.215,52 per somme a disposizione come di seguito specificato:

a)	Lavori a base d’asta a misura
di cui € 2.269,61 (pari al 3%) per oneri di sicurezza		€     75.653,73	
b)	IVA al 20% su € 75.653,73		€     15.130,75	
c)	Somme a disposizione			
	Spese tecniche 	€      1.513,07		
	Imprevisti (IVA compresa)	€      7.652,45 		
	Contributo autorità di vigilanza	€           50,00		
	Sommano		€      9.215,52	
				
	IMPORTO COMPLESSIVO		€   100.000,00	

Con la stessa determina n. 1170 del 07/12/2006 i lavori sono stati affidati a trattativa diretta all’Impresa cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. via G. Pastore n° 27 – 41033 Concordia s/S  (MO), P.IVA 00154960363, per nette €  75.653,73 oltre l’IVA al 20%, come da contratto RSP n° 1602 del 23/03/2007;

Durante l’esecuzione dei lavori principali si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili per cui sono state apportate modifiche sostanziali, formalizzate con perizia di variante tecnica e suppletiva, che hanno dato adito a nuovi o a diversi interventi alle interferenze in oggetto, rendendo necessaria una variazione alle opere di intervento già progettate.

Le varianti al progetto principale relativo a cavidotti ed impianti irrigui sono perciò riassumibili come segue:

- interferenza telecom n° 6 cavidotto in corrispondenza dello scatolare di via Garofalana OA06.
Occorre eseguire una nuova predisposizione per il cavo telecom 200 coppie collegata in n.3 pozzetti 60x600 per consentire lo spostamento definitivo della linea ora posata provvisoriamente su pali;

- interferenza linea aerea 15.000 Hera in corrispondenza del nuovo cavalcavia di via Magazzino.
I lavori principali prevedevano la realizzazione di un breve tratto di tubo camicia con il metodo della spingitubo, ma per le caratteristiche del terreno riscontrate, particolarmente ghiaioso e con la presenza di grossi trovanti, questo metodo non è realizzabile ed è stata prevista quindi la posa di un cavidotto dal primo palo esistente fino all’ultimo, su richiesta dei nuovi tecnici Hera subentrati nel frattempo ai tecnici Enel, compresi i pozzetti di dimensione 200 x 100 non previsti e lo scavo del rilevato delle rampe del cavalcavia ed il suo ripristino, non previsto.

 il fissaggio, tramite staffe zincate, di n.2 controtubi in acciaio DN200 sul cavalcavia di via Confine OA03 per il passaggio dei  servizi tecnologici acqua e gas, come richiesto dai tecnici HERA.

il fissaggio, tramite staffe zincate, di n.1 controtubo in acciaio DN400 sull’impalcato della soletta del sottopasso di via garofalana OA06 come richiesto dai tecnici HERA Vignola, per l’attraversamento di tubazione d’acquedotto.

- interferenze con le proprietà. Nell’ambito dei lavori si rende necessaria la realizzazione di tratti di recinzioni in alcune proprietà interessate dai lavori in oggetto e l’esecuzione di particolari pezzi speciali e opere relative agli impianti irrigui.

Durante l’esecuzione delle opere si sono resi necessari alcuni lavori aggiuntivi di dettaglio come maggiori lavorazioni di mano d’opera e noleggi di automezzi per piccole riparazioni del manufatto esistente

Si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale previsto pari a 30 giorni naturali e consecutivi.

Pertanto sentiti il responsabile del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, si è proceduto a redigere una PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
VARIANTE E SUPPLETTIVA per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi del comma 1b  dell’art.25 della legge 109/94;
SUPPLETTIVA per la risoluzione di aspetti di dettaglio, minore del 10% e non soggetta a “variante” ai sensi del comma 3 parte prima dell’art.25 della legge 109/94;
per un importo complessivo pari € 127.844,74 e a un  VERBALE DI NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25.05.1895 n.350, come previsto dall’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, con n. 9 nuovi prezzi unitari, per un importo aggiuntivo netto pari a € 29.137,04 e così l’importo netto dei lavori in appalto viene  fissato  in  € 104.790,77;
    
I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il sottoscritto Direttore dei lavori geom. Alberto Garuti e il direttore tecnico dell'Impresa geom. Leonardo Luppi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto;

La somma complessivamente impegnata risulta perciò pari a complessive € 127.844,74 con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 29.137,04, così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 104.790,77 al netto utilizzando le somme degli imprevisti;

Risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza non soggetta al ribasso d’asta, che in totale risulta essere € 3.173,72 pari al 3% dell’importo lordo;

La Direzione Lavori giudica opportuno affidare l’esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante e suppletiva alla stessa Impresa cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. via G. Pastore n° 27 – 41033 Concordia s/S  (MO) P. IVA 00154960363, affidataria dei lavori principali;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;

Inoltre per i lavori della perizia di variante e suppletiva viene concessa una proroga del tempo contrattuale pari a 60 giorni naturali e consecutivi;

Pertanto si è proceduto a redigere una perizia di variante e suppletiva, e un nuovo quadro economico, per un importo complessivo invariato,  così suddiviso:

1)	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta
di cui € 2.269,61 per oneri di sicurezza	€  75.653,73		
	Lavori a misura perizia di variante al netto del ribasso d’asta
di cui € 874,11 per oneri di sicurezza	€   29.137,04		
	Lavori  totali al netto del ribasso d’asta		€    104.790,77	
2)	IVA 20% su € 104.790,77		€      20.958,15	
3)	Somme a disposizione			
	- Spese Tecniche	€      1.513,07		
	- Spese Tecniche aggiuntive 2% Perizia	€        582,75		
	sommano		€        2.095,82	
				
	IMPORTO COMPLESSIVO		€    127.844,74	

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato dovrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it
Per quanto precede

Il dirigente determina

1)	di approvare la perizia di variante e suppletiva  dell’importo complessivo aumentato con lavori al netto del ribasso pari a € 104.790,77 con un aumento di € 29.137,04 rispetto al contratto d’appalto e il nuovo quadro economico come in premessa riportato;
2)	di approvare il Verbale Nuovi prezzi contemplante  n. 9 nuovi prezzi unitari a misura;
3)	di dare atto che rispetto alla perizia dei lavori originaria l'importo netto dei lavori ammonta a € 104.790,77 determinando un aumento contrattuale di € 29.137,04, come indicato in premessa, al quale viene fatto fronte con le somme degli imprevisti, come risulta dallo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
4)	di approvare il nuovo quadro economico come in premessa riportato;
5)	di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva all’Impresa cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. via G. Pastore n° 27 – 41033 Concordia s/S  (MO) P. IVA 00154960363, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale; 
6)	di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva  occorre una proroga del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi ;
7)	di dare atto che la perizia di variante e suppletiva, l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la documentazione fotografica, la relazione tecnica, i disegni esecutivi, sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. N._______ del _____ regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
8)	di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
9)	di dare atto che il presente provvedimento comporta una maggiorazione di spesa di € 29.137,04 rispetto al finanziamento di € 100.000,00 e pertanto i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione all’Azione …………;
10)	di autorizzare, fin d’ora, il pagamento delle fatture presentate dalla ditta aggiudicataria dei lavori, previo regolare liquidazione invia tecnica e contabile da parte degli organi competenti, sempre che non venga superato l’importo della spesa prevista ed autorizzata con il presente atto;
11)	di impegnare la spesa all’azione n.  ……………..;

[INTESTAZIONE_PDF_2]